중원로 가로경관 환경개선 용역

과 업 지 시 서

2024.  01.

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명 : 중원로 가로경관 환경개선 용역

2. 과업기간 : 계약일로부터 90일

3. 과업예산 : 50,000,000원 (금오천만원, 부가가치세 포함)

*시공(예정) 공사예산 : 500,000,000원 (금오억원, 부가가치세 포함)

4. 계약방법 : 일반경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

5. 과업배경 및 목적

가. 진해 충무지구 도시재생사업의 세부사업인 본 과업을 통해 중원로의 역사문화자산 브랜딩과 기존 시민참여축제(가을 군항제)문화를 촉진할 수 있는 가로 공간을 조성하고자 함.

나. 중원로의 역사문화 경관을 조성할 수 있는 식재, 바닥, 가로등, 버스정류장 등 가로공간의 물리적 환경을 통합적 도시공간으로 조성해 지역특화 브랜드로 조성하고자 함.

다. 주민의견 청취 및 참여형 워크숍을 통한 경관조성 과정에서 사회적 합의 도출.

6. 과업범위

가. 공간적 범위 : 진해역광장에서 중원로터리까지 이어지는 중원로와 연결된 골목 가로공간 계획

나. 내용적 범위

- 지역주민 대상 수요조사 및 가로공간 디자인요소 목록화

- 진해 충무지구 건축경관 마스터플랜 및 진해 역사문화공간 입면정비전략과 연계하여 다음의 가로환경요소 디자인 제시

① 보행로 바닥공간 (전면보수 또는 표지판과 연계된 일부보수 방안)

② 주차장 및 버스정류장

③ 가로등 및 안내판 사인체계

④ 공공시설물 (벤치, 외부테이블, 조경활용 스트릿 퍼니쳐 등)

⑤ 조경

⑥ 국가등록문화재 및 주요 역사문화자산의 야간경관

- 기본설계안에 대한 주민설명회(2회) 실시

- 도시재생현장지원센터와 정기적 업무협의

- 진해 근대역사문화공간 관련 문화재청 자문 및 협의

- 구청 및 경찰서 등 행정기관 협의

「진해 근대역사문화공간 현황도」 *연계사업 확장 고려 참조 사진	가로경관 개선사업을 위한 범위 위치도 (면적: 약 25,417㎡ 합산 거리: 약665m)
중원로터리 방향(현장사진)	진해역 방향(현장사진)
사거리 정주공간 및 가로경관 부재(현장사진)	조경식재 및 인도점거 무단 구조물(현장사진)
가로 정주공간 개인 무단 설치물(현황사진)	상권 안내판 개인무단 설치물(현황사진)

7. 과업 내용 (과업 세부내용 참조)

1) 대상지 현황조사 및 분석

가. 진해 충무지구 건축경관마스터플랜, 진해 근대역사문화공간 종합정비계획 분석을 통한 실현가능한 가로경관 디자인 전략 수립

나. 중원로에 시설물, 조명, 조경 등 전기공사와 시공가능 영역 분석

다. 문화재청 협의 후 주민설명회 개최(2회)를 통한 의견청취

2) 기본설계도서 및 디자인요소별 세부설계안 제출

가. 진해 근대역사문화공간 종합정비계획에서 수립한 입면정비 계획안을 고려한 가로공간 정비 전략계획

나. 진해 가을군항제의 거리축제, 부스설치, 퍼레이드, 국가등록문화재 공간체험 등 기 개발된 프로그램을 촉진 및 지원할 수 있는 가로공간 정비 전략계획 수립

다. 가로환경요소 세부디자인 제시

① 보행로 바닥공간 (전면보수 또는 표지판과 연계된 일부보수 방안)

② 주차장 및 버스정류장

③ 가로등 및 안내판 사인체계

④ 공공시설물 (벤치, 외부테이블, 조경활용 스트릿 퍼니쳐 등)

⑤ 조경

⑥ 국가등록문화재 및 주요 역사문화자산의 야간경관

[예시] parklet

모든 거리 조건에 적응할 수 있으며 구성 요소를 재배열, 추가 및 수정할 수 있는 유연성을 제공하며,

부품 키트로 시스템을 설계. 확장, 수정 및 개별성 부여 가능해야 함.

Ⅱ		과업 세부내용

1. 기본계획 및 관련계획 검토

계약상대자는 아래항목에 대하여 변경사항이나 부적합한 사항이 있는지 조사․검토하여 기본설계에 반영 하여야 한다.

1) 도시계획 현황, 창원시 경관계획, 창원시 공공디자인, 건축기반 통합마스터 플랜, 진해 근대역사문화공간 종합정비계획 등 관련 계획 검토

2) 기본설계안에 대한 문화재청과 협의

3) 기본설계안에 대한 주민설명회(2회) 및 도시재생지원센터와 정기적 협의

2. 기본설계 계획 수립

가. 현황조사 및 여건분석

1) 기존 보행환경, 가로경관, 가로시설물 등 현황조사 및 분석

2) 기존 가로입면 현황조사 및 분석

나. 가로경관 기본 디자인 제시

1) 아래 가로환경요소들을 활용한 가로경관 전략 디자인 제시

① 보행로 바닥공간 (전면보수 또는 표지판과 연계된 일부보수 방안)

② 주차장 및 버스정류장

③ 가로등 및 안내판 사인체계

④ 공공시설물 (벤치, 외부테이블, 조경활용 스트릿 퍼니쳐 등)

⑤ 조경

⑥ 국가등록문화재 및 주요 역사문화자산의 야간경관

다. 가로환경요소 세부디자인 제시

① 보행로 바닥공간 (전면보수 또는 표지판과 연계된 일부보수 방안)

- 중원로의 입면현황 및 역사문화자산과 봄/가을 군항제의 축제 프로그램과 연계한 실현가능한 세부디자인  방안 제시

- 유지관리 및 보수에 용이한 실현가능한 세부디자인 방안 제시

② 주차장 및 버스정류장

- 중원로의 역사성에 연계된 실현가능한 세부디자인 방안 제시

- 봄/가을 군항제 포함 방문객에게 편의 제공할 수 있는 디자인 방안 제시

③ 가로등 및 안내판 사인체계

- 역사문화공간의 특성에 맞는 조도 및 설치기준 제시

- 중원로의 역사성과 연계된 실현가능한 세부디자인 방안 제시

- 유연한 활용이 가능한 가로등 및 안내판 사인체계 제시

④ 공공시설물 (벤치, 외부테이블, 조경활용 스트릿 퍼니처 등)

- 공공시설물의 종류, 설치위치, 제작방법, 재료 등은 공사예산을 고려해 시설물의 세부 디자인을 제시할 것.

- 역사문화자산과 봄/가을 군항제의 축제 프로그램과 연계한 실현가능한 시설물의 세부 디자인을 제시할 것.

- 택티컬어바니즘(Tactical Urbanism)의 축제운영 및 문화기획이 가능한 공공시설물의 세부 디자인을 제시할 것.

⑤ 조경

- 기존 가로수를 보존하고 봄/가을 군항제 시기에 방문객의 편의 도모 및 경관 개선할 수 있는 디자인 방안 제시

⑥ 국가등록문화재 및 주요 역사문화자산의 야간경관

- 중원로의 역사성을 존중하고 진해역과 중원로 사이의 도시축의 특성을 보여주는 야간경관 전략 제시필요.

3. 설계변경 조건

가. 준수사항

1) 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업지시서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

2) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 창원시도시재생지원센터가 과업수행상 필요하다고 인정하는 추가 과업에 대하여는 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

3) 본 과업지시서의 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시에는 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

나. 설계변경

본 설계진행 중 창원시도시재생지원센터가 필요하다고 인정하여 설계변경을 요구할 때 계약상대자는 이를 거부할 수 없으며, 이를 성실히 수행하여야 한다.

다. 설계변경 조건

1) 본 과업 수행중 정책변경 또는 창원시도시재생지원센터의 계획변경으로 인하여

과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 지시내용이 변경 될 경우

2) 민원발생에 의한 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

3) 창원시도시재생지원센터의 계획변경으로 신규 공종 또는 용역물량의 증감이

발생할 때

4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

5) 관계기관 협의, 발주기관의 계획으로 인하여 과업내용이 변경될 경우

6) 기타 정당한 변경사유가 있을 경우

4. 일반사항

가. 차후 실시설계용역을 위하여 기본계획의 디자인 의도를 상세히 설명하여야 하며, 예정 공사비(5억원) 집행 시 협조하여야 한다.

나. 보행자의 시선을 고려한 디자인과 경관조명의 위치를 충분히 고려하여 이에 적합한 배치계획을 작성하여야 한다.

다. 재료명, 재료특성, 조립부품과 규격, 색상코드, 마감처리방법, 두께, 제작방법, 조립순서 등을 명확히 표현하여야 한다.

라. 쉽고 정확히 시공할 수 있도록 상세한 디자인과 치수가 설계도서에 나타나도록 작성하여야 한다.

마. 제안 디자인은 각종 자문을 거쳐서 최종 확정된 디자인이어야 한다.

바. 사용자재는 내구성 및 심미성이 있고 에너지절약 및 친환경소재를 사용하여야 한다.

사. 공사비가 경제적이며, 시공 및 유지관리가 용이하도록 설계하여야 한다.

아. 기존 구조물에 영향이 최소화 되는 방안 검토 및 기준으로 제시하여야 한다.

자. 본 용역에 사용하는 각종재료와 제품은 국산자재(관급자재)를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품과 고효율 인증제품이 있는 경우 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단, 외국산 자재를 사용 시는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택 하여야 한다.

차. 기타 부대시설의 설계는 창원시도시재생지원센터와 협의하여 설계하여야 한다.

5. 성과품 작성 및 납품

- 성과품 작성 일반사항

가. 성과품 작성 일반사항

1) 모든 성과품은 분야별로 작성하고, 인쇄는 창원시도시재생지원센터와 상의

하여 승인받아 작성한다.

2) 표기에 사용되는 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙

으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

3) 성과품은 창원시도시재생지원센터가 요구하는 규모에 따라 구분하여 작성

제출한다.

4) 성과품 설계도서에는 시공 상 의문이나 문제점이 발생하지 않도록 현장을 이해

하여 작성하여야 한다.

5) 관련법규 및 제반규정을 준수하여 작성하여야 한다.

6) 보고서 작성에 관한 사항

① 최종보고서의 재질은 정밀사진 및 도면 등의 표현이 가능하도록 전문가 및

창원시도시재생지원센터와 협의하여 선정하여야 한다.

② 최종도면 및 최종보고서의 전산파일(USB) 제출 시 활용이 가능하도록 조치하여야 한다.

③ 각종 보고회에 제출하는 보고서는 과업의 특성을 고려, 컬러인쇄를 원칙으로 한다.

- 성과품 작성 세부사항

가. 전산파일(USB) 작성기준

1) 해당 과업 납품도서 전체를 USB에 저장하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

2) 각각의 도서를 작성하는 프로그램은 호환이 가능한지 여부를 확인 하여야 한다.

3) 도면 작성은 CAD프로그램을 사용하여 시트파일 형태로 작성하고 사용된

한글 Font를 함께 수록하여 파일 읽기에 지장이 없어야 하며, 종류별로 목차

를 구성하고 도면을 분류하여 수록하여야 한다.

4) 보고서는 워드프로세서로 작성된 파일을 수록하되, 필요시 이미지파일 및

그림 파일을 함께 수록하여야 한다.

5) 기타 필요한 데이터는 호환이 가능한 프로그램으로 작성하여야 한다.

나. 설계도면 작성에 관한 사항

1) 설계도서는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 설계도서 작성기준에 따라

작성하여야 하며, 기타 관계법령에서 정하는 사항에 적합하여야 한다.

2) 설계용 도면은 도면의 훼손을 방지할 수 있도록 하고 보관이 용이하도록

케이스에 내장하여 제출 하여야 한다.

3) 도면 작성 시 각부 치수(미터법 사용), 사용자재(품질, 규격, 형태) 상세도 작성

및 평면도 명기, 도면 이해를 위한 주기 및 시공 시 유의사항 등을 상세히

명기하여 시공 및 적산에 반영하여 작성하여야 한다.

4) 도면표기는 관련 법규 및 제반 규정을 준수하여 표기하고 참여 책임기술자가

서명 날인 하여야 한다.

*참여 책임기술자는 계약시 명시해 두며, 변경시 발주처에 동의를 얻어 변경가능. 또한 기술사, 건축사 자격증 또는 박사학위 이상자를 대상으로 한다.

다. 시방서 작성에 관한 사항

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능,

구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등

을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 등을 근간으로 설계자의

의도가 정확히 반영되어야 한다.

2) 공사시방서는 공사에 사용되는 각 공종별 시공방법, 자재에 대한 시방을 상세

하게 수록하고 알기 쉽게 작성 하여야 한다.

3) 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나, 공사시방서 내용 상호간에 중복되지

않도록 작성하여야 한다.

4) 특별히 포함되어야 할 사항

가) 자재, 장비사용에 관한 사항 또는 과업에 따른 설계자의 공사지침, 방법 등에 대한 규정 등으로 시공 용역과업 수행 시 준수되어야 할 사항

나) 공사에 사용될 자재의 성능, 규격 및 시험 등 자재에 관한 사항과 시공방법, 허용오차 등 시공에 관한 사항, 공사 전반에 관한 주의사항과 절차 등 기술적인 사항

라. 설계예산서 작성

1) 예산서의 구성: 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 수량산출서 및 단가산출서로 구별하여 작성한다.

2) 설계예산서: 설계예산서는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

3) 원가계산: 원가계산은 회계예규 “원가계산에 의한 예정가격 작성준칙”에 의거 작성 하여야 한다.

4) 총괄내역서: 총괄내역서에는 제경비의 산출근거가 포함되어야 한다.

5) 단가산출서의 작성

가) 노임의 기준 : 노임기준은 납품전 공사노임단가(당해년도 최근 대한건설협회

발표)를 기준 한다.

나) 품셈 : 품셈은 최근「건설공사 표준품셈」에 준한다.

다) 재료비 : 재료비는「정부구매물자 가격정보」를 포함하여 2개 이상의 물가

정보지를 조사하여 산출한다.

6) 수량산출서의 작성 : 수량산출서는 별책으로 작성한다.

가) 각 공종별로 수량을 산출 집계 하여야 한다.

나) 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

다) 각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

Ⅲ		과업수행 지침

1). 착수신고서 및 기타 제출서류

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 지방자치단체 과업계약 일반조건 규정에

따라 다음 서류를 각 1부 제출 하여야 한다.

가) 착수신고서

- 사업착수 보고서

- 참여기술자 명단 및 책임기술자 선임계(이력서 첨부)

- 기술과업 수행 예정공정표

나) 분야별 참여기술자, 장비투입계획 및 작업계획서

다) 보안대책 및 보안각서

라) 과업수행에 필요한 아래 서류

마) 내국기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 학력, 경력사항을 확인할 수

있는 서류

바) 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할

수 있는 서류

사) 기타 계약담당자가 지정한 서류제출 사항

2) 과업수행계획서 제출

계약상대자는 계약일로부터 10일 이내에 세부과업 수행계획서를 작성, 창원시

도시재생지원센터에 제출하여 검토를 받아야 한다.

3) 참여기술자 서명

과업수행계획서에 참여기술자(총괄 및 책임기술자) 본인의 이름을 직접 기재한   명단을 작성 제출함으로써 책임의식 고취 등 설계수준을 향상시킬 수 있도록

설계실명제의 내실화를 기하여야 한다.

4) 행정업무(자문, 검토)이행 및 공정보고

계약상대자는 아래 진행단계 등에 대해 최종 성과품 납품전 창원시도시재생지원센터에서 요구하는 모든 행정업무를 이행하여야 하고, 이에 필요한 자료들은 ‘계약상대자“의 부담으로 제출하여야 한다.

가) 주민설명회(2회) 및 협의

나) 사업 발주처(창원시 및 센터) 협의

다) 문화재청, 구청 및 경찰서 등 필요한 기관 협의

5) 보고회 및 공정보고

가) 착수보고

나) 중간보고

다) 주민설명회(2회, 주민의견 수렴)

라) 최종보고(도시재생현장지원센터와 최종 협의, 최종공유회 2주전)

마) 최종공유회(주민, 창원시, 센터)

바) 매주 1회 서면 주간공정보고 실시

6) 기타 보고회

- 설계내용의 주요사항이 변경될 경우 또는 설계방향 결정을 위하여 자문을 받을 필요가 있는 경우 등 창원시도시재생지원센터가 필요하다고 인정하는 경우

- 과업수행에 있어 부분별, 단계별 과업의 진척상황 등 창원시도시재생지원센터의 요청이 있을 경우

8) 지적사항의 조치

각종 보고회에 요청사항에 대하여는 면밀히 분석․검토하여 창원시도시재생지원센터

에 조치계획 보고 및 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 한다.

9) 기타사항

가) 본 과업과 관련한 보고회, 행사 등의 회의록, 사진 등 일체의 기록을

작성하고 관리․보관 하여야 한다.

나) 과업완료 후에는 각종 기록을 정리하여 발주처에 제출 하여야 한다.

7. 일반사항

- 과업수행방법 및 책임한계

1) 과업수행 방법

가) 본 과업지시서는「중원로 가로경관 환경개선 용역」에 대한 과업을 원활히 수행하기 위한 필요 사항을 정하며, 본 과업은 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령, 정부제정 표준시방서(건축, 토목, 조경, 전기 등)에 의거 수행 하여야 하며, 창원시도시재생지원센터와 협의하여 수행 하여야 한다.

나) 계약상대자는 본 과업 내용서와 창원시도시재생지원센터에서 제공하는 자료 등에 따라 과업을 충실히 이행하여야 하고 창원시도시재생지원센터의 지휘감독을 받아야 하며 책임기술자 및 분야별 참여기술자는 업체현황 평가 시 제출한 기술자를 본 과업에 투입하여야 한다. 단, 퇴직․질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때에는 동등 기술자(자격, 경력, 학력) 이상의 자로 사전에 승인을 받아야 하고, 과업수행도중에 부득이 변경하여야 할 경우 또한 같다.

다) 과업성격상 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우에는 창원시도시재생지원센터의 승인을 득하여, 특정기관 및 업체에게 과업의 일부를 의뢰하여 시행할 수 있다.

라) 창원시도시재생지원센터는 과업수행중 참여연구원이 과업수행에 부적합하다고 인정될 때에는 계약상대자에게 참여연구원의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 교체 하여야 한다.

2) 책임한계

가) 설계오류

- 설계내용이 표준시방서 등 설계기준에 비추어 하자가 있는 경우에는 창원시도시재생지원센터의 검토․확인 등을 받아 작성된 도서라 할지라도 계약상대자의 설계오류에 대한 책임은 면제되지 않는다.

- 기본계획 성과품을 성실히 검토하여 설계하자 및 오류가 있을 경우에는 이를

수정․보완하여야 하며 최종 납품되는 성과품에 대한 책임은 본 과업의 계약상대자가

진다.

나) 보안사항

보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은

계약상대자가 진다.

3) 과업 감독 등

창원시도시재생지원센터는 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여

다음의 계약관련 업무내용을 확인ㆍ감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에

적극 협조 하여야 한다.

가) 기술인력 동원현황

나) 과업단계별 과업추진내용 및 공정현황

다) 기타 확인에 필요한 사항

4) 과업점검

창원시도시재생지원센터는 설계품질 확인 및 원활한 과업업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 과업감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

마. 특허권의 사용 및 디자인·재료선정

가) 본 용역수행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 지적재산권·특허권의 권리를 사용·편취 할 때는 계약상대자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

나) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업규격(K.S), 각종표준 시방서 규정에 적합한 것으로 경제성, 사용성, 내구성, 유지 보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영해야 한다. 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 발주처의 승인을 받되 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시 하여야 한다.

바. 타 계약 상대자와 업무한계

본 과업을 수행함에 있어 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약자

상호간에 과업분할 협의서를 작성 후 수행 하여야 한다.

사. 과업기간 변경

다음의 경우에 한하여 창원시도시재생지원센터의 승인을 얻어 과업기간을 변경

할 수 있다.

1) 천재지변 등으로 작업이 불가능 할 때

2) 발주자의 방침변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

3) 계약 이후 당초 설계수량이 현저하게 증감되었을 때

4) 기타 창원시도시재생지원센터가 필요하다고 인정하는 경우

5) 민원발생에 의한 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

Ⅴ		추진내용 및 성과품

구 분	주요내용	제출물
최종 및 결과보고서	- 사업결과(최종용역결과) 보고서 자료집 ＊ 단, 결과물은 발주기관과 사전검토 후 제출가능 - 증빙보고서(과업결과물 모두 제출)	- 최종보고서 책자 10부 - 파일 (USB) 1개 - 증빙서류 1식	A4 좌철 제본
	착수보고 (착수 후 7일 이내) 중간보고 (50%이상 수행 시) 수시보고(필요 시) 최종보고(주민설명회, 유관기관 협의 기록 첨부)	보고회 개최 및 보고서 제작 * 방식 및 방법 추후 협의
	설계도서 설계(디자인) 종합보고서 공사비예산서 수량산출서 단가산출서 지장물조서 현황조사 사진자료집 공사시방서 (일반시방서, 특별시방서 구분) 유지관리 지침서 디자인시뮬레이션(3d, psd 파일 등 USB 동봉) 설계도서 전자파일	3부 * A3도서(설계도서, 디자인 시뮬레이션) * 그 외 규격 A4	기본 설계도서 전자파일 USB 1개
주민설명회	2회	- 설명자료, 의견 기록문

※ 성과품의 작성내용, 품명, 수량은 발주자의 요구에 의해 변경될 수 있음.